[별지 6]

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

어린이집 확충

담당자

주민복지과 한선미(☎3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 출산율 제고 및 맞벌이가정, 자영업자, 농·어업인의 육아 부담 경감

○ 보육의 공공성 강화로 믿고 맡기는 보육서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019.2 ~ 2020.12

○ 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 375외 7필지(남해여중인근 예정)

○ 규 모 : 부지면적:4,221㎡, 건축연면적 : 990㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,880	0	0	2,880	0
국 비	460	0	0	460	0
시 도 비	230	0	0	230	0
시군구비	890	0	0	890	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 2. 28.(목) : 하나금융그룹 국공립어린이집 지원 사업(15억) 신청

○ 2019. 3.  8.(금) : 국도비 신청

○ 2019. 3. 14.(목) : 하나금융그룹&하나금융공익재단(푸르니) 현장실사

○ 2019. 3. 26.(화) : 보건복지부, 경남도 국도비(6.9억원) 현장 실사

○ 2019. 4.  4.(목) : 하나금융그룹&하나금융공익재단(푸르니) 선정(13억)

○ 2019. 5.  9.(목) : 남해군-하나금융그룹 합동 협약식(군수님, 서울 하나금융본사)

○ 2019. 5. 16.(목) : 국도비 확정내시(6.9억)

□ 향후계획

○ 2019. 7월 중 : 부지 매입 및 신축에 관한 협약서 작성

○ 2019. 10월 ~ 2020. 12월 : 실시설계 및 사업수행(푸르니보육재단)

사업명

남해추모누리 확충

담당자

주민복지과 최영훈(☎3854)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개정된 대기환경법에 적합한 화장로 구축으로 친환경적인 화장서비스를 제공하고, 증가하는 화장 수요에 대응

○ 장사시설을 증축하여 이용객들에게 더 나은 장사서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018.1 ~ 2019.6

○ 위 치 : 남해군 서면 연죽로 46-77 남해추모누리 일원

○ 규 모 : 추모누리 증축 212㎡, 화장로 증설 1기 및 교체2기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,204백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,204	0	714	1,490	0
국 비	616	0	450	166	0
시 도 비
시군구비	1,588	0	264	1,324	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018.  3월 : 실시설계용역 및 재정투자심사 완료

○ 2018.  6월 : 조달청 기술검토, 원가검토 완료 및 입찰

○ 2018.  7월 : 업체계약 및 착공

○ 2018. 12월 : 건축, 전기공사 설계변경 시행

□ 향후계획

○ 2019.  1월 : 화장로 증설 1기 착공, LPG연료 단가계약 체결

○ 2019.  3월 : 건축공사, 소방공사 준공, 발전기(360kw) 설비

○ 2019.  4월 : 전기공사, 소방공사 준공

○ 2019.  6월 : 추모누리 확충사업 준공

사업명

염해지구 연안정비사업

담당자

해양수산과 황성호(☎860-3373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 따른 해일, 파랑 또는 연암침식 등으로부터 연안을 보전하고

자연재해 사전 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020년

○ 위 치 : 서면 남상리 염해항 일원

○ 규 모 : 이안제 L=150m, 파라펫 L=255m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000		32	1,428	2,373
국 비	2,800		23	1,000	1,661
시 도 비	360		3	128	213
시군구비	840		6	300	499
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 10 ~ 12월 : 실시설계용역 시행

○ 2019. 1 ~ 5월 : 행정절차 이행(해역이용협의, 공유수면 점사용 등)

○ 2019. 6월 : 실시계획 협의

○ 2019. 7월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12월 : 공사 준공(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

남해 에코촌 조성 사업

담당자

환경녹지과 서한경

(☎860-3253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 생태관광 활성화를 위해 생태자원을 활용하여 생태 관광ㆍ교육ㆍ

체험을 융·복합하는 숙박 중심의 거점 조성사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년~2021년(4년간)

○ 위 치 : 남해군 이동면 무림리 1164-3번지 일원(65,680㎡)

○ 규 모 : 에코센터304㎡, 체험관322㎡, 에코빌리지 9동21실(1,161㎡),

캠핑장 40면, 생태숲체험장, 생태탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,600		1,869	858	7,873
국 비	4,000	-	2	250	3,748
시 도 비	1,200	-	0.6	75	1,124.4
시군구비	5,400	-	1,866.4	533	3,000.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22.9 %)

○ ‘18.04~ : 에코촌 토지감정 완료 및 보상협의 실시(95%보상)

○ ‘18.05~ : 군관리계획변경, 전략환경영향평가 용역 시행중

○ ‘19.07~ : 실시설계 용역 시행중

□ 향후계획

○ ‘20.02 : 실시설계 용역 완료

○ ‘20.03~ : 남해 에코촌 조성 공사시행(2021.12 준공예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사업규모	55,873㎡	65,680㎡
총사업비	9,900백만원	10,600백만원
사업기간	2018~2020년	2018~2021년

사업명

남해힐링숲타운조성

담당자

환경녹지과 김평주(☎860-3663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해군 내산지역의 풍부한 산림자원과 남해편백자연휴양림을 연계 숲이

제공하는 이로움을 바탕으로 건전한 여가활동을 위한 산림문화휴양 관광 자원 창출.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년~2022년

○ 위 치 : 경남 남해군 삼동면 봉화리 산502일원

○ 규 모 : 31ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500		14	786	2,700
국 비	1,350				1,350
시 도 비	540				540
시군구비	1,610		14	786	810
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 완료

○ 부지매입(7.4ha) 완료

□ 향후계획

○ 2019. 9. ~               : 진입로 정비

○ 2020. 2. ~ 2020. 12.      : 실시설계 및 사업 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음