[별지 7]

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

남해군 청사신축 사업

담당자

청사행정팀 김성진(☎860-8824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합행정타운 기능의 군청사 신축과 청사주변 공원 및 문화공간 조성을       통한 도심내 주민편의 도모 및 미래 남해 100년 준비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원

○ 규 모 : 연면적 14,814㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 69,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	69,500	0	6,622	13,335	49,523
국 비
시 도 비
시군구비	69,500	0	6,622	13,335	49,523
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

❍ 행정안전부 타당성 조사(’20.8.31) 및 경남도 투자심사 통과 (’20.10.22.)

❍ 보상협의 추진 : ‘20. 10.  ~ 계속

❍ 이주단지 조성(이주희망자 5명/ 분양 1명) : ’20. 12

❍ 매장문화재 시굴조사 시행 및 보상(이사)완료 건축물 철거 : ‘20. 12. ~

❍ 청사 설계공모 관련 절차 진행 : ’21. 8. ~ 11.

□ 향후계획

❍ 지장물 철거 및 문화재 조사 : ’20. 12. ~ 계속

❍ 청사 기본설계 및 실시설계 : ’21. 12. ~ ‘22. 12.

❍ 청사신축 시공사 선정 및 착공 : ‘23. 1. ~

❍ 청사 준공 : ’24. 12.

사업명

남해군 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치사업

담당자

환경물관리단 신재욱

(☎860-3278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음식물류폐기물 공공처리시설의 기술진단 결과 설비의 노후화 및 설비

효율 저하 최종제품 수요처 확보의 어려움 등으로 폐쇄 및 신설로 진단

○ 유기물 통합처리가 시설설치 및 유지관리 비용 측면에서 효율적이며

정부의 최적화 정책에 따라 하동군과 광역화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 남해군 남해읍 남변리 135-13번지 일원

○ 규 모 : 33톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,930	0	0	583	14,347
국 비	7,679	0	0	300	7,379
시 도 비	2,901	0	0	81	2,820
시군구비	4,350	0	0	202	4,148
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ ‘19. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료

○ ’20. 03. : ‘21년 폐기물처리시설 국고보조사업 신청

○ ’20. 06. : 지방재정 투사심사 완료(경남도)

○ ‘21. 03. : 폐기물처리시설 위탁사업 사전협의 요청

○ ’21. 07. : 폐기물처리시설 협약체결 가능 협의완료

□ 향후계획

○ ‘21. 08. : 폐기물처리시설 위·수탁 협약

○ ’21. 12. : 기본 및 실시설계 용역

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 (당초 156억원 → 변경 149억원)

○ 사업기간 변경 (당초 2021~2023 → 변경 2021~2024)

사업명

남해 서울농장 조성사업

담당자

청년혁신과 김은영(☎860-3468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시에서 체험할 수 없는 수려한 자연환경을 활용하여 도시청년의
농촌정착과 삶의 재충전으로 다양한 삶의 방식 기회 제공

○ 도시민의 농촌 살아보기 등 체험을 통한 농촌정착 유도 및 지역
농산물 홍보 판매를 통한 농가 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 2026. 12. (6년 6개월)

○ 위 치 : 남해군 상주면 양아리 301-1 일원 [폐]상주초등학교양아분교장)

○ 규 모 : A=10,832㎡

- 기본건축물 915㎡(숙소, 교육장, 다목적홀, 사무실, 화장실, 욕실, 식당, 지역특산물판매장, 휴게시설 등)

- 실습농장 4,454㎡(주말농장, 비닐하우스 등)

- 기타 시설 5,463㎡(주차장, 운동장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600		870	1,730	1,000
국 비
시 도 비	1,300		48	552	700
시군구비	2,300		822	1,178	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 서울시 제2차연도 서울농장 조성사업 공모선정        : 2020. 03. 31.

○ 남해 서울농장 조성 업무협약               : 2020. 05. 26.

○ 부지 매입(남해군 상주초교양아분교장)       : 2020.04.∼2020.06.

○ 건축물 정밀안전진단 및 안전점검 용역      : 2020.07.~2020.08.

○ 진입로 측량 및 정비공사 실시설계 용역        : 2020.08.~2020.10.

○ 기본계획 수립용역                         : 2020.09.~2020.12.

○ 진입로 정비공사                           : 2020.11.~2020.12.

○ 실시설계 용역                          : 2021.03.~2021.07.

□ 향후계획

○ 시설공사 착공                             : 2021.08.

○ 남해 서울농장 운영 조례 제정              : 2021.08.

○ 위탁운영자 선정                           : 2021.10.

○ 남해 서울농장 운영                        : 2022.01.~2026.12.

사업명

화전도서관 증축(어린이도서관 건립)

담당자

청년혁신과 박보혜(☎860-3862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화전도서관의 어린이 독서서비스 확대를 위한 전용 도서관 건립

○ 가족 친화적 포용적 개방 공간 조성으로 아이 키우기 좋은 남해 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 남해읍 아산리 358-2 일원

○ 규 모 : 부지면적 813㎡, 건축 연면적 750㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,711백만원(국비 1,505, 군비 1,206)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,711	2,711	350	2,361
국 비	1,505	1,505	0	1,505
시 도 비
시군구비	1,206	1,206	350	856
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 계획 수립 완료         : 2021. 3. 29

○ 공공건축심의위원회 심의완료 : 2021. 4. 30

○ 실시설계 공모 완료          : 2021. 7. 21

□ 향후계획

○ 실시 설계 용역 : 2021. 8 〜 11월

○ 건축 시행 및 완료  : 2021. 12 〜 2022. 12월

□ 사업변경 내역

○ 국비 감액 확정으로 총사업비 변경 : 당초 2, 809백만원 ⇒ 2,711백만원

- 국비 1,890백만원 신청 ⇒ 1,505백만원 확정

사업명

남해 생활SOC「삼동다락(樂)」건립사업

담당자

재무과 조영미(☎860-3153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 된 현 청사의 신축과 생활SOC 시설(생활문화센터, 공용주차장)의 복합화를 통해 효율성 및 편의성 증진

○ 수요자 입장에서 행정, 문화, 복지의 원스톱 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼동면 지족리 257-2번지 일원

○ 규 모 : 부지 2,233㎡, 연면적 1,454㎡, 지상4층 이하

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,571백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,571			1,872	2,699
국 비	1,539			546	993
시 도 비
시군구비	3,032			1,326	1,706
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계공모 중  %)

○ 기본계획수립용역 준공 : 2021. 3. 15.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2021. 4. 6.

○ 남해군 공공건축심의회 심의 : 2021. 6. 25.

○ 설계공모 : 2021. 7. 26. ~ 10. 7.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 : 2021. 10. ~ 2022. 5.

○ 착공 : 2022. 7.

○ 준공 : 2023. 6.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 (당초 2021~2022 → 변경 2021~2023)

: 사전행정절차 이행을 위한 소요기간 필요로 다소 지연됨.

사업명

보물섬 미조항 멸치축제

담당자

문화관광과 박진석(☎860-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정해역의 미조 해산물(수산물)을 널리 알리고 미조멸치의 우수성을 홍       보함으로써 지역경제 활성화에 기여

○ 축제를 통한 관광활성화 및 관광남해 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 5월

○ 위 치 : 남해군 미조면 북항 일원

○ 규 모 : 멸치와 각종 해산물을 소재로 한 축제개최(특산물 시식·판매부스 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	150		0	0	150
국 비
시 도 비
시군구비	150	-	0	0	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ ‘19. 5. 4. ~ 5. 6. : 제16회 보물섬 미조항 멸치&바다축제 개최

○ ‘20 ~ ’21 : 코로나19로 인해 축제 취소

□ 향후계획

○ 2022년 5월 : 제17회 보물섬 미조항 멸치축제 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

상주은모래비치 섬머페스티벌

담당자

문화관광과 박진석(☎860-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여름철 상주해수욕장을 찾는 관광객을 대상으로 다양한 문화행사를 개최하여 상주은모래비치 관광 이미지 부각

○ 해수욕장 확성화 및 관광객 유치 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 8월

○ 위 치 : 남해군 상주면 상주은모래비치 일원

○ 규 모 : 여름철 상주은모래비치 해수욕장을 찾는 관광객을 대상으로

행사 (무대공연, 체험행사 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	100	-	0	0	100
국 비
시 도 비
시군구비	100	-	0	0	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘19. 8. 2. ~ 8. 4. : 2019 상주은모래비치 섬머페스티벌 개최

○ ‘20 ~ ’21 : 코로나19로 인해 행사 취소

□ 향후계획

○ 2022년 8월 : 상주은모래비치 섬머페스티벌 개최 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

보물섬 마늘&한우축제

담당자

문화관광과 박진석(☎860-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해마늘 및 한우의 우수성 홍보와 판촉을 통한 농가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 6월

○ 위 치 : 남해군 서면 스포츠파크길 74, 남해스포츠파크 일원

○ 규 모 : 마늘과 한우를 소재로 한 축제개최(마늘주제관 운영 외 56종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 758백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	758		100	258	400
국 비
시 도 비
시군구비	758	-	100	258	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘20. 6. 12. ~ 6. 14. : 코로나19로 인해 보물섬 마늘&한우축제 대안 농특산물 판매행사 개최

○ ‘21. 6. 24. ~ 6. 28. : 제16회 보물섬 마늘&한우축제 개최

(코로나19로 인해 온라인·드라이브스루 행사 위주)

□ 향후계획

○ 2022년 6월 : 제17회 보물섬 마늘 & 한우축제 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

남해대교 관광자원화사업

담당자

문화관광과 박현우(☎860-8614)

□ 사업목적 및 필요성

○남해대교는 50여 년간 섬과 육지를 잇는 문화교류의 통로 기능을 해왔으나 교량 기능이 다해감에 따라 시대에 맞는 관광자원으로 재생

○우리나라 최초의 현수교라는 근대문화유산적 가치 보존을 통해 지역관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년~2025년

○ 위 치 : 경남 남해군 설천면 노량리 산34-17 남해대교 일원

○ 규 모 : 남해대교 재생 및 주변지역 활성화

- (주탑) : 특화시설(브릿지 클라이밍)  - (교량) : 문화브릿지 재생

- (주변지역) : 워터프론트, 게이트교량, 마을활성화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계		0	0	1,200	17,800
국 비		0	0	600	8,900
시 도 비		0	0	180	2,670
시군구비		0	0	420	6,230
지 방 채		0	0
민간자본		0	0
기 타		0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 남해대교 관리권 전환(부산국토관리청 → 남해군) : ’18. 9.

○ 경상남도 지방재정투자심사 완료 : ’20. 6.

○ 계약심사 및 계약심의 완료 : ’21. 4.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행 : ’21. 7. (협상에 의한 계약)

- 현장설명회(7. 1), 제안서평가위원 모집공고, 제안서접수(8. 9)

□ 향후계획

○ 2021년 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착공

○ 2022년 8월 : 남해대교 관광자원화사업 공사 착수

○ 2025년 12월 : 공사 준공 및 운영

사업명

코리아둘레길과 함께하는 이순신 리더십

담당자

문화관광과 곽슬기(☎860-8605)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코리아둘레길(남파랑길 46코스)을 역사와 호국의 요람인 이순신 순국공원 등과 연계하여 다양한 연령층이 이용 가능한 역사 탐방 대표코스로 육성

○ 바다, 산과 마을을 통과하는 수려한 자연경관을 통해 걷기여행 활성화

및 코리아둘레길(남파랑길) 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 12.

○ 위 치 : 남파랑길 46코스

○ 규 모 : 코리아 둘레길과 함께하는 이순신 리더십 팸투어 운영

○ 운영대상 : 청소년, 여행(걷기)동호회 및 블로그 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 130백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	130		21
국 비	65		11
시 도 비	19.5		3
시군구비	45.5		7
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 팸투어 진행 1회  ※ 코로나 19 심화로 사업 실적 저조

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

바둑 슈퍼매치 대회

담당자

체육진흥과 최경아

(☎860-8683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 바둑 랭킹 1위(신진서 9단)와 3위(박정환 9단)간의 슈퍼매치를 우리군

에서 유치하여 우리군 주요 관광지 홍보와 국내 바둑저변 확대에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10월 ∼ 2021. 1월

○ 위 치 : 남해군 일원

○ 규 모 : 전국대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	290	0	290	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	290		290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회개최 완료 : 2020. 9. 25. ~ 2021. 1. 31.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 2020. 9. 25.  ~ 12. 30. → 2020. 9. 25. ~ 2021. 1. 31.

⇒「바둑슈퍼매치」의 중국CCTV 방송계획이 2020년 12월에서 2021년 1월

중순으로 변경되어 이에 따른 바둑대회 홍보효과 최종분석을 위해 사업

기간 1개월 연장

사업명

첨단친환경양식시스템 지원(친환경 바이오플락 실내사육)

담당자

해양수산과

곽소망(☎860-3363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경·고부가가치 양식품종의 생산 증대를 위하여 기르는어업의 기반시설을 확충하고, 기술 개발·보급을 촉진하며, 수산종자 및 양식 시설을 친환경·첨단시스템으로 전환키 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘20.01월 ∼ ‘20.12월

○ 위 치 : 경상남도 남해군 서면 정포리 1077-7필지

○ 규 모 : 부지면적 8,773㎡, 시설면적 5,066㎡(수조 30개 외 부대시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,676백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,676			3,676
국 비	1,103			1,103
시 도 비	331			331
시군구비	772			772
지 방 채
민간자본	1,470			1,470
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 인·허가

당초 사업부지에서 양식장을 운영하기에는 용수 공급 등의 문제 발생으로 부지 변경에 기간 소요

‘20. 11. 보조금 교부 신청 후 개발행위허가 및 건축허가

○ 사전행정절차

부지변경에 따른 사업계획 변경 신청

군 자체 투자심사 완료

□ 향후계획

○ 결산 추경에 군비 확보 완료로 사업자 보조금 교부신청 후 인·허가 절차와 동시에 실시 설계 및 착공

□ 사업변경 내역

○ 사업계획(사업부지) 변경 승인 내역

당 초	변 경
남해군 삼동면 봉화리 1482-3번지 외 3필지	남해군 서면 정포리 1077-7번지

사업명

장포항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 도현율(☎860-3373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광      등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·경제적으로 지역의 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 창선면 진동리 576-3번지 일원

○ 규 모 : 방파제 보강, 다목적광장 조성, 어민커뮤니티 공간 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,449	1,429	1,429	2,139.6	1,880.4
국 비	3,744.3	1,000.3	1,000.3	1,497.72	1,246.28
시 도 비	481.41	128.61	128.61	192.564	160,236
시군구비	1,123.29	300.09	300.09	449.316	373,884
지 방 채
민간자본
기타(자부담)	100				100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 19. 12. : 20년 어촌뉴딜300사업 선정

○ 21. 02. : 기본계획 고시

□ 향후계획

○ 21. 10. : 시행계획 수립 및 고시

○ 22. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

선구지구 연안정비사업

담당자

해양수산과 도현율(☎860-3373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수 또는 연안의 침식 등으로부터 연안을 보호하고 훼손된       연안을 정비하는 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 남해군 남면 선구리 694-2번지 일원

○ 규 모 : 이안제 L=250m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,604백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,604				12,604
국 비	8,823				8,823
시 도 비	1,134				1,134
시군구비	2,647				2,647
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 20. 06. : 제3차(2020~2029) 연안정비기본계획 수립 및 고시

○ 20. 06. : 지방재정 투자심사(경상남도)

□ 향후계획

○ 사업비 확보 후 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

봉천 생태하천 복원사업

담당자

재난안전과 박기홍(☎860-3493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태복원형 하천을 조성함으로써 주민들에게 친수 하천공간 제공 및 삶의 질 향상, 환경·생태도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 일원

○ 규 모 : 생태하천복원 L=0.90㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비				500	4,000
시 도 비				120	960
시군구비	180	103	77	380	2,860
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2021. 5. : 소규모환경영향평가 협의

○ 2021. 6. : 생태하천 복원사업 실시설계 기술검토 협의

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 생태하천 복원사업 심의

○ 2021. 9. : 생태하천 복원사업 비관리청협의

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농촌자원복합 산업화 지원사업

담당자

유통지원과 박성환(☎860-3912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 유통, 가공, 외식산업, 문화창작 등 농촌융복합화가 가능한 로컬푸드센터        중심의 복합문화시설 건립을 통해 직거래 활성화 유도 및 유통구조 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 창선면 동대리 482-2 외 1필지

○ 규 모 : 로컬푸드 복합문화센터 건립(950㎡)

- 로컬푸드직매장 100㎡, 농가레스토랑 400㎡, 전망카페 300㎡, 문화시설 150㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,200			200	2,000
국 비
시 도 비	1,100			100	1,000
시군구비	1,100			100	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투자심사 : 2020. 2월

○ 제2차 지역균형발전사업 확정 : 2020. 10월

○ 기본계획수립 용역 착수 : 2021. 4월

□ 향후계획

○ 실시설계 공모 완료 : 2021. 12월

○ 로컬푸드 복합문화센터 착공 : 2022.  3월

○ 로컬푸드 복합문화센터 준공 : 2022. 10월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

경제림단지육성

담당자

산림공원과 김도연(☎860-3663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해군은 경제림 육성단지 관리계획(2009.1.)에 의거 사유림 경영 활성화를

도모하였으나,  산주들의 관심 저로 방치되고 있는 산림을 공유임도로

매입하고 국내 목재공급 및 우량 목재 자원 증식위해 지정한 경제림육성

단지의 체계적 관리

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2030.

○ 위 치 : 남해군 서면 노구리 산98번지 일원(외 6필지)

○ 규 모 : 232ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,400	-	5	900	3,495
국 비	1,400	-	-	-	1,400
시 도 비	400	-	-	-	400
시군구비	2,600	-	5	900	1,695

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020.11. : 3개마을(중리·노구·유포마을) ㈜남해파워와의 협약서에

의해 이의신청서 제출(* 7필지 중 4필지 풍력허가)

- ㈜남해파워 행정심판 제기 : 2021.1.18.(경상남도행정심판위원회)

○ 경제림 단지조성을 위한 사유림 매입

- 서면 노구리 산99-1번지 932,926㎡ 중 177,527㎡ 매입 등기완료(남해군)

□ 향후계획

○ 서면 노구리 산99-1번지 2021년 추경 및 2022년 당초예산 요구(계획)

- 추경 확정 후 잔여면적 매입 추진(추경 6억원 추가 편성 요구)

□ 사업변경 내역

○ 경제림단지육성 부지매입 관련 당초 20억원 → 38억원(감정평가)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	4,400	6,200	o 감정평가에 의한 1,650원/㎡으로 군비 증액(18억원)
국 비	1,400	1,400
시 도 비	400	400
시군구비	2,600	4,400